			국민고충처리위원회
수신자				내부결재
(경유)
제목	정부민원안내콜센터 상담시설 공사 계획

1. ｢정부민원안내콜센터 시스템 및 기반구축 1단계 사업｣과 관련하여 시설공사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

○ 공사 내용 : 위원회 2층 상담실 및 전산실 시설 공사

○ 공사 기간 : 2006.10.11 ~ 2006.12.29

○ 공사 일정

내 용	기 간
설계도 검토 착성	2006.10.11 ~ 2006.10.31
전기통신 공사	2006.11.01 ~ 2006.11.30
바닥 및 부속실 공사	2006.11.01 ~ 2006.12.05
인테리어 공사	2006.11.13 ~ 2006.12.24
소방 공사	2006.11.20 ~ 2006.11.23
보안 공사	2006.12.01 ~ 2006.12.11
가구 및 집기 설치	2006.12.08 ~ 2006.12.23
마무리 점검	2006.12.13 ~ 2006.12.29

붙 임 : 상담시설 공사 계획 1부. 끝.

조사관							정부민원콜센터팀장			전결 11/01
협조자
시행			정부민원콜센터팀-496											접수
우	120-705					서울 서대문구 미근동 257 임광빌딩 1층										/	www.ombudsman.go.kr
전화			02-360-2768					전송	02-360-2710				/	hjk@ombudsman.go.kr				/		공개