영문보도자료 배포여부	X

		보도자료
			▪2022. 5. 12.(목) ▪총 2쪽
			▪배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.
홍보담당관실 (T) 044-200-7071, 7073, 7078 (F) 044-200-7911			작성	행정문화교육민원과 과 장 이성섭 ☏ 044-200-7341 사무관 김기홍 ☏ 044-200-7350
국민권익위, “발주사업 정산 시 추가 과업 수행에 대한 정당한 대가 지급해야” - 사업과정에서 발주기관 요청으로 다량의 설계업무 추가됐다면 추가 설계비 반영해 정산하는 것이 타당 -

□ 공공사업 과정에서 발주기관의 요청으로 다량의 설계업무가 추가됐다면 추가된 설계비를 반영해 정산하는 것이 타당하다는 판단이 나왔다.

국민권익위원회(위원장 전현희, 이하 국민권익위)는 공공사업 발주기관인 지방자치단체의 요청으로 다량의 설계업무가 추가됐는데도 이를 반영하지 않은 정산에 대해 재심사할 것을 해당 지자체에 시정권고 했다.

□ 〇〇시는 주민체육시설 건립을 위해 2017년 5월 ‘도시관리계획 결정 및 실시설계용역’에 착수해 사업을 추진했다.

이 과정에서 지난해 3월 사업부지가 ‘〇〇 제3기 신도시 사업’에 포함돼 더 이상 사업추진이 불가능하게 되자 〇〇시는 같은 해 10월 용역 계약을 중도 해지했다.

이후 당초 계약한 기본 및 실시설계 비용을 기준으로 사업 중단시점까지 완료된 작업 결과물에 대해 준공 정산을 하고 그에 상당하는 금액을 정산금으로 관할 지방법원에 공탁했다.

이에 대해 용역사업자는 “발주기관인 〇〇시의 추가 과업 요구로 2차 설계를 해 기본 및 실시설계 비용이 증가했고, 계약 당시 예정돼 있지 않던 공공디자인 심의가 추가됐는데도 이에 대한 대가가 정산에 반영되지 않았다.”라고 주장했다.

용역사업자는 “기본 및 실시설계 비용 증가분과 공공디자인 심의비용을 추가 반영해 정산금을 지급받을 수 있게 해 달라”며 국민권익위에 고충민원을 제기했다.

□ 국민권익위의 조사 결과, 〇〇시의 요청으로 대지 면적 및 건축 연면적의 증가, 층별 세부용도 추가, 추정 공사비의 증액 등이 있었고 이를 반영해 도시관리계획 결정 및 공공디자인 심의 등이 추진됐다는 점을 확인했다.

또 당초 계약 시 기본 및 실시설계 비용의 산출이 추정 공사비에 연동해 건축설계요율을 적용하는 방식으로 이루어진 점 등을 종합적으로 고려했다.

이에 국민권익위는 추가 과업 수행에 따른 기본 및 실시설계 비용의 증가분은 당초 계약내용에 포함되지 않은 사항이므로 이를 반영해 정산금액을 재심사하는 것이 타당하다고 판단했다.

□ 국민권익위 안준호 고충처리국장은 “발주기관의 요청에 따라 당초 계약된 사항 이외에 추가 과업이 수행된 경우 이에 대한 정당한 대가를 지급하는 원칙이 공공부문에 정착되길 바란다.”라고 말했다.