2013.4.12.(금) 14시 이후 보도해주십시오.

보도자료

홍보담당관실 (T) 02-360-2721～8 (F) 02-360-3520	자료배포	2013. 4. 12.
	담당부서	주택건축민원과
	과 장	최 상 근 ☏ 02-360-2921
	담당자	류 지 호 ☏ 02-360-2935
	￭ 총 2 쪽

원주 흥업주택단지 조성공사로 인한 교통불편 해소

국민권익위, 대체도로 5월까지 조기 개설토록 중재

○ 강원도 원주시 흥업면 일원 원주흥업국민임대주택단지 조성공사로 인한 지역주민들의 통행 불편이 국민권익위원회(위원장 이성보)의 조정으로 오는 5월 대체도로가 임시 개통되면서 해소될 것으로 보인다.

○ 지역주민들은 마을 진·출입로가 주택단지 조성공사 부지로 편입되면서 토사유출 등으로 통행이 불편하고, 특히 장마가 오면 교통사고 위험이 높아질 것이라며 지난 해부터 관계기관에 개선을 요구해 왔다.

참고로 해당 사업은 강원도 원주시 흥업면 125-1번지 일원에 국민임대주택단지 부지를 조성하기 위해 공사를 실시하고 있으며, 지난 2007년 1월 당시 건설교통부의 주택건설사업 승인을 받아 2009년 9월에 착공해 현재까지 공사를 진행 중이다.

○ 지난 2월 지역 주민들의 민원을 접수한 국민권익위는 여러 차례의 현장조사와 실무 조정 협의를 통해 12일 오후 2시 정기창 상임위원 주재로 강원도 원주시 흥업면 흥업리 소재 원주흥업국민임대주택단지 현장사무실에서 이호원 LH공사 강원지역본부장과 윤주섭 원주시 건설도시국장이 참여한 가운데 현장 조정회의를 개최해 중재를 이끌어냈다.

○ 국민권익위의 중재에 따라 LH공사는 ▲ 당초 오는 9월까지 완료하려던 마을 진·출입용 대체도로(폭=10m, 길이=252m 도시계획도로)의 도로 기층공사를 5월까지 조기 완료해 주민들이 통행할 수 있도록 조치해 불편을 해소하고 ▲ 대체도로가 생길 때까지는 현장안내원 등을 기존 도로에 배치해 교통사고를 예방하고 ▲ 공사차량에 대한 세척시설을 마련하고 공사현장에서 발생하는 비산먼지의 발생을 최소화하도록 했다.

강원도 원주시는 ▲ 대체도로 개설에 따른 개발행위허가에 필요한 행정지원을 해주기로 했다.

○ 이번 회의를 주재한 정기창 상임위원은 “국민임대주택단지 조성공사로 인한 주민들의 통행불편이 해결되어 기쁘게 생각하고, 민원 해결을 위해 협조한 LH공사 관계자와 강원도 원주시 공무원들에게도 깊은 감사를 드린다.”고 밝혔다.