2014. 9. 3.(수) 14시 30분 이후 보도해 주십시오.

보도자료

홍보담당관실 (T) 02-360-2721～5, 2727 (F) 02-360-3520	▪2014. 9. 4.(목) ▪총 3쪽
	작성	교통도로민원과 과장 백승수 ☏ 02-360-2891 담당 김경태 ☏ 02-360-2906

권익위, 호남고속철도 정읍 농소지하차도 결빙대책 중재

기존선과 고속철 연결지하차도 66m에 덮게 설치 합의

○  국민권익위원회(위원장 이성보)는 3일 오후 2시 정읍시청에서 현장조정회의를 열고, 호남고속철도 정읍시 구간 ‘농소지하차도’에 겨울철 결빙방지 대책으로 덮개를 설치해 달라는 집단민원을 중재하여 해결방안을 마련하였다.

○ 정읍시 농소동에 있는 농소지하차도는 기존 호남선과 신설 고속철도를 연결하는 66m 길이의 지하차도다. 정읍시를 지나는  7개 호남고속철 지하차도 중에서 유일하게 윗부분이 개방되어 있다. 이로 인해 겨울철 눈이 많은 지역 특성상 결빙으로 인한 교통사고를 우려하는 목소리가 높았다.

○ 하지만 한국철도시설공단은 호남고속철 공사가 12월 준공 예정으로 마무리 단계에 와 있고, 지하차도는 자동염수분사방식*으로 시공할 계획이어서 추가 공사가 어렵다는 입장이었다. 이러자 정읍시민 1천 5백여 명이 지난 7월 권익위에 집단민원을 제기했었다.

※ 자동 염수분사방식은 강설시 자동으로 염수를 분사하여 결빙을 방지하는 시설. 노면에 전기열선을 설치하여 제설 및 결빙을 방지하는 히팅시스템과 대비

○ 권익위는 민원접수 후 수차례의 실무협의와 현장조사를 거쳐 3일 오후 2시 정읍시청에서 시민들과 이현정 한국철도시설공단 호남본부장, 김생기 정읍시장 등이 참석한 가운데 박재영   부위원장 주재로 현장조정회의를 개최하여 최종적인 합의를 이끌어 냈다.

이날 ▲ 한국철도시설공단은 정읍구간 7개 지하차도에 설치할 벽면타일 등 시설일부를 정읍시와 협의하여 변경시공하고, 이로 인한 절감사업비를 농소지하차도 덮게(66m) 설치비용에 충당하며, ▲ 정읍시장은 덮개설치비 중 4억 원을 공동부담하고, ▲ 시민들은 더 이상 이의를 제기는 하지 않기로 합의하였다.

○  조정회의를 주재한 박재영 국민권익위원회 부위원장은 “호남고속철도사업은 내년 3월 개통을 앞두고 마무리가 한창인데도, 시민안전 문제에 귀 기울이고 대책마련에 적극 나서 준 관계기관에 감사한다”며, 특히 “지하차도 덮게 공사가 진행되는 올 겨울철 안전관리에 만전을 기해 줄 것”을 당부했다.

붙임 : 현황사진

○ 현장사진

고속선 호남선 정읍방향 용산방향
농소지하차도 전경
농소지하차도(고속선) 전경	농소지하차도(호남선) 전경