		보도자료
			▪2015. 9. 24.(목) ▪총 2쪽
			▪엠바고 없음
홍보담당관실 (T) 044-200-7071～7073, 7078 (F) 044-200-7911			작성	도시수자원민원과 과 장 김재수 ☏ 044-200-7481 서기관 장경수 ☏ 044-200-7484
공사비에 누락된 법정경비는 계약 후라도 지급해야
권익위, 공기업 불공정 계약관행 시정 권고

□  국민권익위원회(위원장 이성보, 이하 권익위)는 발주자가 공사비를 산정할 때 법정경비*를 누락했다면 계약체결 이후라도 계약상대자에게 이를 지급해야 한다고 권고했다.

* 법정경비란 건설공사 시 건설기술관리법, 건설산업기본법 등에 따라 공사원가에 반드시 반영하도록 규정한 경비임.

□ 정부의 계약예규인「예정가격작성기준」에 따르면 발주자가 공사원가 계산 시 공사에 실제 투입되는 재료비, 노무비, 경비는 물론 그에 따른 일반관리비와 이윤을 반영하도록 되어있다.

< 공사원가계산서(예정가격 작성기준) >

비 목
순공사 원가	재료비	직접재료비, 간접재료비
	노무비	직접노무비, 간접노무비
	경비	전력비, 운반비, 기계경비, 임차료, 보험료 등 * 법정경비 : 건강보험료, 환경보존비, 안전관리비 등
일반관리비[(재료비+노무비+경비)×( )%]
이윤[(노무비+경비+일반관리비)×( )%]
총원가

□ 정부산하 A공기업은 553억 원 규모의 건축공사 입찰공고를 내면서 공사원가를 산정할 때 경비 중 일부항목과 일반관리비, 이윤을 누락했다.

B기업은 A공기업이 산정한 공사원가에 따라 입찰하여 공사계약을 체결했다.

B기업은 계약 체결 후 공사 설계서를 검토하는 과정에서 공사원가에 경비 중 일부항목과 일반관리비, 이윤 등 약 22억 원이 반영되지 않은 것을 발견하고 이를 지급해 달라는 고충민원을 권익위에 제기했다.

□ 이에 대해 A공기업은 공사원가 계산 시 일부품목의 단가가 과소 반영됐다 하더라도 상호 합의에 의해 이미 계약이 체결됐기 때문에 계약금액을 조정할 수 없다는 입장이었다.

□ 권익위는 A공기업이 공사원가에 재료비와 노무비만 반영하고 경비 중 일부항목 및 일반관리비, 이윤을 반영하지 않은 것을 밝혀내어 이 중 최소한 관련 법령에 의무적으로 사용토록 규정되어 있는 법정경비 약 5억 6천만 원은 계약 체결 후라도 반영하도록 A공기업에 권고했다.

□  권익위 관계자는 “지금까지는 공사원가에 경비․일반관리비 등이 반영되지 않았더라도 합의에 의해 계약이 성립됐다는 이유로 이를 반영하지 않는 것이 발주기관의 관행이었으나 이번 권고로 그 간의 비정상적 관행이 개선되는 계기가 될 것으로 기대한다.”고 밝혔다.

□  한편, 권익위는 당사자 간 계약 관련 분쟁 해소를 주로 법원 판결에 의존함에 따라  해결이 장기화되고 비용이 증가하는 등 기업고충을 해소하기 위해 공공기관과 관련한 계약분쟁 처리를 중점 추진하고 있다.