영문보도자료 배포여부	x

		보도자료
			▪2020. 3. 9.(화) ▪총 2쪽
			▪배포 즉시 보도해주시기 바랍니다.
홍보담당관실 (T) 044-200-7071, 7073, 7078 (F) 044-200-7911			작성	민원조사기획과 과 장 임진홍 ☏ 044-200-7311 사무관 김경희 ☏ 044-200-7307
국민권익위, 세종시 고운동 발파공사 반대 2,105세대 집단민원 ‘조정 해결’ ▴발파량 감량 ▴발파공사 시 아파트와의 떨어진 거리 확대 ▴발파 후 피해상황 점검 등 대안 마련 -

□ 세종특별자치시 고운동 단독주택용지의 발파공사로 인해 소음·진동 등 피해와 신축 아파트 손상을 우려하는 인근 아파트 입주민들 2,105세대의 집단민원을 조정으로 해결했다.

국민권익위원회(위원장 전현희, 이하 국민권익위)는 행정중심복합도시 1-1생활권 단독주택용지 조성사업에 계획된 발파공사를 반대하는 집단민원을 해결하기 위해 9일 고운동 행정복지센터에서 전현희 위원장 주재로 현장조정회의를 개최했다.

행정중심복합도시 1-1생활권 단독주택용지는 세종특별자치시 고운동 북측에 위치했으며 면적은 약 30만 6천㎡이다.

□ 내년 5월 완공을 목표로 하는 고운동 단독주택용지는 조성계획이 바뀌면서 단지 내 도로의 경사도가 10%에서 7%로 하향돼 발파물량이 늘어나게 됐다.

이에 인근 아파트 입주민들은 발파공사로 인해 소음･진동 등 피해가 예상되고 신축 아파트의 손상이 우려되니 발파공사를 중지해 달라고 지난해 7월 국민권익위에 집단민원을 제기했다.

□ 국민권익위는 해당 발파지 주변에는 민원인들의 아파트 외에도 다른 아파트들이 많아 이번 발파로 인해 주민들에게 피해가 있을 것으로 보고 주민들의 피해를 최소화하기 위해 한국토지주택공사, 행정중심복합도시건설청 등과 여러 차례 관계기관 회의를 거치고 주민설명회를 개최해 갈등을 조정했다.

한국토지주택공사는 ▴당초 발파량 대비 약 45%를 감량키로 하고 이를 위해 해당 단독주택용지 단지 내의 도로 경사도를 7%이하에서 8%이하로 상향 조정하며 ▴발파공사 기간은 8개월에서 6개월 이내로 단축하기로 했으며 ▴일일 발파횟수는 2회 이내로 제한했다. ▴발파 시 떨어진 거리는 가장 가까운 아파트와의 거리를 56m에서 100m 이상 떨어지게 하도록 했다.

행정중심복합도시건설청은 한국토지주택공사가 발파량 감량을 위해 도로종단 경사 변경을 추진하면 교통영향평가 등 관련 행정절차 진행에 협조하기로 했다.

세종특별자치시는 공사차량 출입 및 비산먼지 등으로 주민피해가 없도록 현장관리에 협조키로 했다.

□ 국민권익위 전현희 위원장은 “이번 민원은 공사를 진행하고자 하는 한국토지주택공사와 공사 중지를 요구하는 입주민들 간의 갈등이 표류 위기에 처했지만 주민 동의를 얻어 조정에 이르게 됐다.”라며 “향후 공사현장이 조속히 정비돼 입주민들의 정주환경이 개선될 것으로 기대한다.”라고 말했다.